정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2014-176	담당부서 작성자	(경제산업실 / 전략산업과) (이구주 / 041-635-2254)
정 책 명	수소자동차 및 충전소 보급사업
사업개요	○ 추진배경 - 수소자동차 도입으로 대기오염 저감 및 청정 이미지 부각 - 공공부문 시범사업을 통한 수요 창출과 수소충전 인프라 구축 선도 - 수소자동차 수요 전망에 따른 양산체제 구축 유도로 경쟁력 확보 및 국가적 핵심산업 육성 ○ 추진기간 : 2014 ~ 2015년 ○ 총사업비 : 62.7억원(국비 21.6 / 도비 41.1) ○ 주요내용 - 수소충전소(1,650㎡) 1기, 수소자동차 17대 ※ 수소연료전지차 가격 인하(1.5억원→0.85억원, ’15. 2월)로 수량 조정(11대→17대) ※ 운영주체 : 수소충전소(충남TP 자동차센터), 수소자동차(道)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 연월일 : 2013 ~ 2014. 7. 30 - 관련자 : 전략산업과장 김현철 / 공업6 임채성 □ 환경부, 충남TP, 충남개발공사와 사업 추진방향 협의(’13. 1월) □ 환경부,「’14년 수소자동차 ․ 충전소 보급사업」국비 21.6억원 확보(’13. 12월) □ 지방재정 투융자 심사(’14. 3월) □ 수소자동차 및 충전소 보급사업 추진계획 수립(’14. 4월) □ 환경부, 국고보조금 1억원 신청(’14. 5월) □ 수소충전소 구축 자문위원회 구성(’14. 7월) ○ 연월일 : 2014. 7. 30 ~ 2015. 1. 1 - 관련자 : 전략산업과장 김현철 / 공업6 이구주 □ 소충전소 구축 자문위원회 운영(’14. 8월) □ 수소충전소 설치사업 도비(30.7억원) 추경예산 반영(’14. 8월) □ 도 부담액(30.7억원) 교부(도→충남TP)(’14. 10월) □ 환경부 보조금(21.6억원) 교부(환경부→도→충남TP)(’14. 10월) □ 수소충전소 부지 매입(LH공사↔충남TP)(’14. 12월) □ 수소충전설비 시스템 업체 조달 계약(’14. 12월) ○ 연월일 : 2015. 1. 2 ~ 현재 - 관련자 : 전략산업과장 박용권 / 공업6 이구주 □ 수소연료전지차 가격 인하(1.5억원→0.85억원)에 따라 구입 수량 조정(11대→17대)(’15. 2월) □ 고압가스제조(충천)허가 승인(홍성군)(’15. 3월) □ 수소충전소 건축허가 승인(홍성군)(’15. 4월) □ 수소충전소 건축공사 업체 선정(’15. 4월) □ 수소충전소 감리업체 선정(’15. 5월) □ 수소충전소 공사 착공(’15. 5월) ※기한 : ’15. 5. 13 ~ 9. 9