복수~대전(2차) 지방도 확․포장공사

◈ 위    치 : 금산군 복수면 구례리 일원(지635호)

◈ 사 업 량 : 연장=1.04km, 폭=19.5m

◈ 사 업 비 : 36,126백만원(공사비 29,679, 보상비 등 6,447)

◈ 공사기간 : 2010.12.30.~2016.07.18.(종합진도 : 65%)

◈ 공사시행 : (시공) ㈜삼전건설 외 1개사, (감리) ㈜삼보기술단 외 1개사

그동안 추진상황(실적)

❍ 구례2교 하부공 및 거더 80본 제작, 거더 40본 거치 및 슬래브 시공

❍ 구레터널 1‧2차 사고발생에 따른 원인조사 및 재설계용역 추진

예산 투자계획

(단위 : 백만원)

공종별	총사업비	2014년 까지	2015년 사업비					2016년 이후
			계	국 비	도 비	시군비	기 타
계	36,126	36,126	0	0	0	0	0	0
공사비	29,679	29,679	0	0	0	0	0	0
보상비	4,997	4,997	0	0	0	0	0	0
감리비	1,383	1,383	0	0	0	0	0	0
부대비	67	67	0	0	0	0	0	0
기타(설계비 등)	0	0	0	0	0	0	0	0

2015년 추진일정(계획)

❍ 구례2교(L=450m), 백암교차로, 기존도로 연결부 시공완료

❍ 구례터널 재설계용역 완료 및 터널 붕괴구간 복구공사 정상재개

그밖에 참고사항

❍ 구례터널 2차 사고원인 및 복구방안 검토결과 전면 개착공법 결정

- 토공작업 선행을 위한 벌목‧작업로 개설 등 공사 재착수(’15. 2월)

- 중재판결 결과에 따라 재원확보 후 최종 설계변경 및 공사 정상재개(’15. 5월)

- 건설분쟁 중재는 소송대리인(정부법무공단)과 공조하여 적극 대응

위 치 도