【2015-23】

정책실명 공개과제 사업내역서(추진 중)

① 정책사업명	충청남도 소방복합시설 조성사업
② 추진배경	ㅇ이전이 필요한 충청소방학교와 임시청사를 활용하여 운영 중인 소방항공구조대, 119광역기동단, 장비정비센터 등 4개 기관(시설)의 집중화를 통한 연계 운영으로 시너지 효과 창출
③ 사업개요	ㅇ(대상) 소방학교, 항공구조대, 광역기동단, 장비정비센터 ㅇ(위치) 청양군 비봉면 록평리 12-1번지 일원 ㅇ(총 사업비) 79,023백만 원 ㅇ(사업 규모) 부지 385,154㎡, 연면적 17,444㎡ ※ 9개 동, 4개 시설물 ㅇ사업방법 : 종합건설사업소 의뢰 설계 및 건축 추진
④ 사업부서	소방행정과		⑤ 담당자	과 장 김경철(5510) 주무관 정해근(5565)
⑥ 선정기준	시설 및 전기, 통신 등을 포함한 총사업비 50억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2017년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 소방복합시설 조성방침 결재 (도지사)		‘15.04.15.	충청남도지사 안희정 소방본부장 한상대 소방행정과장 김근제 기획예산팀장 류일희
○ 소방복합시설 조성 타당성(입지여건) 조사 연구 용역		‘15.05.20. ~ ‘15.10.16.	소방본부장 한상대 소방행정과 김근제 기획예산팀장 류일희 기획예산팀 주무관 이학민
○ 소방복합시설 조성사업 입지선정 및 세부 추진계획 연구 용역		‘16.01.18. ~ ‘16.09.08.	소방본부장 한상대 소방행정과 오영환 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 김정균
○ 소방복합시설 조성 기본계획 수립 (도지사 결재)		‘16.10.26.	충청남도지사 안희정 소방본부장 이창섭 소방행정과장 이동우 복합시설팀장 진종현
○ 지방재정 중앙 투자심사 승인		‘17.02.28.	예산담당관 유흥수 재정지원팀장 도중선 재정지원팀 주무관 김국진

<그간 주요 추진내용>
○ 충청남도 공유재산심의회 득 승인	‘17.03.03.	세무회계과장 류재홍 재산관리팀장 이헌희 재산관리팀 주무관 김유진
○ 충청남도 공유재산 관리계획 도의회 의결	‘17.07.13.	세무회계과장 류재홍 재산관리팀장 이헌희 재산관리팀 주무관 황평하
○ 충남소방복합시설 군관리계획 용역 계약의뢰	‘17.09.11.	소방본부장 이창섭 소방행정과장 조영학 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 충남소방복합시설 군관리계획 용역 추진계획 검토보고	‘17.11.10.	종합건설사업소장 윤병환 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영
○ 충남소방복합시설 군관리계획 변경용역 일상감사 및 계약심사	‘17.12.11.	감사위원회 계약심사팀장 박정순 감사위원회 계약심사팀 주무관 김성수
○ 충남소방복합시설 군관리계획 변경용역 시행 결의	‘17.12.20.	종합건설사업소장 윤병환 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영
○ 충남소방복합시설 군관리계획 변경용역 계약 체결	‘18.04.09.	세무회계과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 가한철
○ 충남소방복합시설 전략환경영향평가 용역 계약 체결	‘18.04.19.	회계과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 가한철
○ 충남소방복합시설 건립사업 발주 의뢰	‘18.05.09.	소방본부장 이창섭 소방행정과장 김성찬 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 충남소방복합시설 설계용역 일상감사 및 계약심사	‘18.05.28.	감사위원회 조사과장 박인서 감사위원회 계약심사팀장 심완보 감사위원회 계약심사팀 주무관 이정호
○ 충남소방복합시설 문화재 지표조사 용역 계약 체결	‘18.06.11.	종합건설사업소장 박일수 종합건설사업소 계약팀장 박상용 종합건설사업소 계약팀 주무관 이길재
○ 충남소방복합시설 건립공사 설계용역 시행결의	‘18.06.25.	종합건설사업소장 박일수 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영

<그간 주요 추진내용>
○ 충남소방복합시설 건립공사 건축설계 공모	‘18.07.04.	자치행정국장 이정구 회계과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 가한철
○ 충남소방복합시설 문화재 지표조사 용역 완료	‘18.07.13.	종합건설사업소장 박일수 종합건설사업소 계약팀장 박상용 종합건설사업소 계약팀 주무관 이길재
○ 충남소방복합시설 건립공사 건축설계공모 심사 및 당선작 통지	‘18.10.10.	종합건설사업소장 박일수 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영
○ 충남소방복합시설 건립공사 설계용역 계약 체결	‘18.10.19.	회계과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 가한철
○ 건설사업관리용역 일상감사 및 계약심사	‘18.11.12.	감사위원회 조사과장 박인서 계약심사팀장 김기택
○ 건설사업관리(감리) 용역 계약 체결	‘19.02.28.	자치행정국장 이정구 운영지원과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 가한철
○ 지방재정투자사업 타당성조사 용역 의뢰	‘19.01.29.	소방본부장 윤순중 소방행정과장 김성찬 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 지방재정투자사업 타당성조사 용역 계약체결	‘19.03.28.	소방본부장 윤순중 소방행정과장 김성찬 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 문화재 표본조사 용역 계약 체결	‘19.05.28.	운영지원과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 가한철

<그간 주요 추진내용>
○ 충남소방복합시설 교통영향평가 용역계약 체결	‘19.06.03	운영지원과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 가한철
○ 문화재 표본조사 용역 완료	’19.06.05.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축1팀장 백상엽
○ 문화재 시굴조사 용역 계약(1차)	‘19.07.09.	운영지원과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 황평하
○ 충남소방복합시설 항공구조헬기 소음측정분석 용역 계약	‘19.08.20.	종합건설사업소 서무과장 허영 종합건설사업소 계약팀장 이미자 종합건설사업소 계약팀 주무관 임선환
○ 지방재정 투자사업 타당성조사 용역 완료	‘19.08.27.	소방본부장 윤순중 소방행정과장 김경철 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 문화재 시굴조사 용역(1차) 완료	‘19.09.11.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축1팀장 백상엽 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원
○ 충남소방복합시설 항공구조헬기 소음측정분석 용역 완료	‘19.09.18.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축1팀장 백상엽 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원
○ 문화재 정밀발굴조사 용역 계약(1차)	‘19.09.19.	운영지원과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 황평하
○ 문화재 시굴조사 용역 계약(2차)	‘19.11.28.	운영지원과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 황평하
○ 충남소방복합시설 전략환경영향 평가 용역 완료	‘19.12.06.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축1팀장 백상엽 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원

<그간 주요 추진내용>
○ 문화재 정밀발굴조사 용역 완료(1차)	‘19.12.18.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축1팀장 백상엽 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원
○ 충남소방복합시설 건립사업 수정계획 수립․결재	’19.12.30.	소방본부장 윤순중 소방행정과장 김경철 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 지방재정 중앙 투자심사(재심사) 승인	‘19.03.31.	예산담당관 구기선 재정지원팀장 김종수 재정지원팀 주무관 이초희