정책실명 공개과제 사업관리이력서(추진 중)

정책실명제 등록번호	2015-23	담당부서 작성자	소방본부 / 소방행정과 (정해근/041-635-5565)
정 책 명	충청남도 소방복합시설 조성사업
사업개요	○ 추진배경 - 이전이 필요한 충청소방학교와 임시청사를 활용하여 운영 중인 소방항공구조대, 119광역기동단, 장비정비센터 등 4개 기관(시설)의 집중화를 통한 연계 운영으로 시너지 효과 창출 ○ 추진기간 : 2017년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 79,023백만 원 ○ 주요내용 - 위 치 : 청양군 비봉면 록평리 12-1번지 일원 - 규 모 : 부지 385,154㎡, 연면적 17,444㎡ ※ 9개 동, 4개 시설물 - 사업방법 : 종합건설사업소 의뢰 설계 및 건축 추진
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘15.04.15. : 소방복합시설 조성방침 결재(도지사) - 관련자 : 충청남도 기획예산팀장 류일희, 소방행정과장 김근제, 소방본부장 한상대, 도지사 안희정 ○ ‘15.10.16. : 소방복합시설 조성 타당성(입지여건) 조사 연구 용역 - 관련자 : 충청남도 소방행정과 기획예산팀 주무관 이학민, 기획예산팀장 류일희, 소방행정과 김근제, 소방본부장 한상대 ○ ‘16.09.08. : 소방복합시설 조성사업 입지선정 및 세부 추진 계획 연구 용역 - 관련자 : 충청남도 소방행정과 복합시설팀 주무관 김정균, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과 오영환, 소방본부장 한상대 ○ ‘16.10.26. : 소방복합시설 조성 기본계획 수립(도지사 결재) - 관련자 : 충청남도 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 이동우, 소방본부장 이창섭, 도지사 안희정 ○ ‘17.02.28. : 지방재정 중앙 투자심사 승인 - 관련자 : 충청남도 예산담당관실 재정지원팀 주무관 김국진, 재정지원팀장 도중선, 예산담당관 유흥수, 기획조정실장 김용찬

추진경과 및 사업 관련자	○ ‘17.03.03. : 충청남도 공유재산심의회 취득 승인 - 관련자 : 충청남도 재산관리팀 주무관 김유진, 재산관리팀장 이헌희, 세무회계과 과장 류재홍 ○‘17.07.13. : 공유재산관리계획 도의회 의결 - 관련자 : 충청남도 재산관리팀 주무관 황평하, 재산관리팀장 이헌희, 세무회계과 과장 류재홍 ○ ‘17.09.11. : 충남소방복합시설 군관리계획 용역 계약 의뢰 - 관련자 : 충청남도 복합시설팀 주무관 정해근, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 조영학, 소방본부장 이창섭 ○ ‘17.11.10. : 충남소방복합시설 군관리계획 용역 추진계획 검토보고 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축팀장 김태영, 시설2과장 오인균, 소장 윤병환 ○ ‘17.12.11. : 충남소방복합시설 군관리계획 변경용역 일상감사 및 계약심사 - 관련자 : 충청남도 감사위원회 계약심사팀 주무관 김성수, 계약심사팀장 박정순 ○ ‘18.04.09. : 충남소방복합시설 군관리계획 변경용역 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 세무회계과 계약팀 담당자 가한철, 계약팀장 이헌희, 세무회계과장 임옥순 ○ ‘18.04.19. : 충남소방복합시설 전략환경영향평가 용역 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 세무회계과 계약팀 주무관 가한철, 계약팀장 이헌희, 세무회계과장 임옥순 ○‘18.05.09. : 충남소방복합시설 건립사업 발주 의뢰 - 관련자 : 충청남도 복합시설팀 주무관 정해근, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 조영학, 소방본부장 이창섭 ○ ‘18.05.28. : 충남소방복합시설 설계용역 일상감사 및 계약심사 - 관련자 : 충청남도 감사위원회 계약심사팀 주무관 이정호, 계약심사팀장 심완보, 조사과장 박인서 ○ ‘18.06.11. : 충남소방복합시설 문화재 지표조사용역 계약 체결 - 관련자 : 충청남도종합건설사업소 계약팀 주무관 이길재, 계약팀장 박상용, 소장 박일수

추진경과 및 사업 관련자	○ ‘18.06.25. : 충남소방복합시설 건립공사 설계용역 시행결의 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축팀장 김태영, 시설2과장 오인균, 소장 박일수 ○ ‘18.07.04. : 충남소방복합시설 건립공사 건축설계 공모 - 관련자 : 충청남도 계약팀 주무관 가한철, 계약팀장 이헌희, 회계과장 임옥순, 자치행정국장 이정구 ○ ‘18.07.13. : 충남소방복합시설 문화재 지표조사 용역 완료 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 계약팀 주무관 이길재, 계약팀장 박상용, 소장 박일수 ○ ‘18.10.10. : 충남소방복합시설 건립공사 건축설계공모 심사 및 당선작 통지 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축팀장 김태영, 시설2과장 오인균, 소장 박일수 ○ ‘18.10.19. : 충남소방복합시설 건립공사 설계용역 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 회계과 계약팀 주무관 가한철, 계약팀장 이헌희, 회계과장 임옥순 ○ ‘18.11.12. : 건설사업관리용역 일상감사 및 계약심사 - 관련자 : 충청남도 감사위원회 계약심사팀장 김기택, 조사과장 박인서 ○ ‘19.02.28. : 건설사업관리(감리) 용역 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 운영지원과 계약팀 주무관 가한철, 계약팀장 이헌희, 운영지원과장 임옥순, 자치행정국장 이정구 ○ ‘19.01.29. : 지방재정투자사업 타당성조사 용역 의뢰 - 관련자 : 충청남도 복합시설팀 주무관 정해근, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 김성찬, 소방본부장 윤순중 ○ ‘19.03.28. : 지방재정투자사업 타당성조사 용역 계약체결 - 관련자 : 충청남도 복합시설팀 주무관 정해근, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 김성찬, 소방본부장 윤순중 ○ ‘19.05.28. : 문화재 표본조사 용역 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 운영지원과 계약팀 주무관 가한철, 계약팀장 이헌희, 운영지원과장 임옥순

추진경과 및 사업 관련자	○ ‘19.06.03 : 충남소방복합시설 교통영향평가 용역계약 체결 - 관련자 : 충청남도 운영지원과 계약팀 주무관 가한철, 계약팀장 이헌희, 운영지원과장 임옥순 ○ ’19.06.05. : 문화재 표본조사 용역 완료 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축1팀장 백상엽 시설2과장 오인균 ○ ‘19.07.09. : 문화재 시굴조사 용역 계약(1차) - 관련자 : 충청남도 운영지원과 계약팀 주무관 황평하, 계약팀장 이헌희, 운영지원과장 임옥순 ○ ‘19.08.20. : 충남소방복합시설 항공구조헬기 소음측정분석 용역 계약 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 계약팀 주무관 임선환, 계약팀장 이미자, 서무과장 허영 ○ ‘19.08.27. : 지방재정 투자사업 타당성조사 용역 완료 - 관련자 : 충청남도 복합시설팀 주무관 정해근, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 김경철, 소방본부장 윤순중 ○ ‘19.09.11. : 문화재 시굴조사 용역(1차) 완료 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원, 건축1팀장 백상엽 시설2과장 오인균 ○ ‘19.09.18. : 충남소방복합시설 항공구조헬기 소음측정분석 용역 완료 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원, 건축1팀장 백상엽 시설2과장 오인균 ○ ‘19.09.19. : 문화재 정밀발굴조사 용역 계약(1차) - 관련자 : 충청남도 운영지원과 계약팀 주무관 황평하, 계약팀장 이헌희, 운영지원과장 임옥순 ○ ‘19.11.28. : 문화재 시굴조사 용역 계약(2차) - 관련자 : 충청남도 운영지원과 계약팀 주무관 황평하, 계약팀장 이헌희, 운영지원과장 임옥순 ○ ‘19.12.06. : 충남소방복합시설 전략환경영향평가 용역 완료 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원, 건축1팀장 백상엽 시설2과장 오인균

추진경과 및 사업 관련자	○ ‘19.12.18. : 문화재 정밀발굴조사 용역 완료(1차) - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원, 건축1팀장 백상엽 시설2과장 오인균 ○ ‘19.12.30. : 충남소방복합시설 건립사업 수정계획 수립․결재 - 관련자 : 충청남도 소방행정과 복합시설팀 주무관 정해근, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 김경철, 소방본부장 윤순중 ○ ’20.03.31. : 지방재정 중앙 투자심사(재심사) 승인 - 관련자 : 충청남도 예산담당관실 재정지원팀 주무관 이초희, 재정지원팀장 김종수, 예산담당관 구기선