정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	소방행정과	②담당자 (전화번호)	소방경 정해근 (635-5565)
③정책사업명	청양소방서 신축사업
④선정기준	1억원 이상의 연구․용역사업	⑤사업기간	’14 ~ ’17년
⑥주요내용	□ 추진배경 : 소방서 미설치지역에 대한 소방행정 서비스 혜택 확대 □ 추진기간 : 2014. 1. ~ 2017. 9. □ 사업개요 - 위 치 : 청양읍 송방리 347-3외 8필지 - 구 조 : 철근 콘크리트조 스라브즙 –1/3층 - 규 모 : 부지 8,015㎡(2,425평) / 연면적 3,426㎡(1,038평) - 총사업비 : 7,843백만원(도비 3,643, 복권기금 4,200) □ 추진사항 - 공유재산심의회 취득 승인(2013. 7월) - 청양소방서 신축계획 수립_도지사 결재(2013. 8월) - 지방재정 중앙 투자심사 승인(2013. 10월) - 기본 및 실시설계 용역 계약(2015. 10. 21.) - 기본 및 실시설계 납품(2016. 3. 16.) - 건축공사 입찰(2016. 6. 14. ~ 29.) - 건축공사 계약 및 착공(2016. 7. 10. / 7. 14.) - 청사 준공(2017. 9. 27.) - 청사 준공식(2017. 10. 30.)