2021-24

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	충청남도 소방복합시설 조성사업			진행 상태		추진중
② 추진배경	ㅇ이전이 필요한 충청소방학교와 임시청사를 활용하여 운영 중인 소방항공대, 장비정비센터 등 기관(시설)의 집중화를 통한 연계 운영으로 시너지 효과 창출
③ 사업개요	ㅇ(대상) 소방학교, 소방항공대, 장비정비센터 ㅇ(위치) 청양군 비봉면 록평리 12-1번지 일원 ㅇ(총 사업비) 79,023백만 원 ㅇ(사업 규모) 부지 388,789㎡, 연면적 17,042㎡ ※ 10개 동, 3개 시설물 ㅇ사업방법 : 종합건설사업소 의뢰 설계 및 건축 추진
④ 사업부서	소방행정과		⑤ 담당자		과 장 류일희(5510) 소방경 배석제(5565)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2017년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 소방복합시설 조성방침 결재 (도지사)		‘15.04.15.	충청남도지사 안희정 소방본부장 한상대 소방행정과장 김근제 기획예산팀장 류일희
○ 소방복합시설 조성 타당성(입지여건) 조사 연구 용역		‘15.05.20. ~ ‘15.10.16.	소방본부장 한상대 소방행정과 김근제 기획예산팀장 류일희 기획예산팀 주무관 이학민
○ 소방복합시설 조성사업 입지선정 및 세부 추진계획 연구 용역		‘16.01.18. ~ ‘16.09.08.	소방본부장 한상대 소방행정과 오영환 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 김정균
○ 소방복합시설 조성 기본계획 수립 (도지사 결재)		‘16.10.26.	충청남도지사 안희정 소방본부장 이창섭 소방행정과장 이동우 복합시설팀장 진종현
○ 지방재정 중앙 투자심사 승인		‘17.02.28.	예산담당관 유흥수 재정지원팀장 도중선 재정지원팀 주무관 김국진

<그간 주요 추진내용>
○ 충청남도 공유재산심의회 득 승인	‘17.03.03.	세무회계과장 류재홍 재산관리팀장 이헌희 재산관리팀 주무관 김유진
○ 충청남도 공유재산 관리계획 도의회 의결	‘17.07.13.	세무회계과장 류재홍 재산관리팀장 이헌희 재산관리팀 주무관 황평하
○ 충남소방복합시설 건립사업 발주 의뢰	‘18.05.09.	소방본부장 이창섭 소방행정과장 김성찬 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 충남소방복합시설 설계용역 일상감사 및 계약심사	‘18.05.28.	감사위원회 조사과장 박인서 감사위원회 계약심사팀장 심완보 감사위원회 계약심사팀 주무관 이정호
○ 충남소방복합시설 문화재 지표조사 용역 계약 체결	‘18.06.11.	종합건설사업소장 박일수 종합건설사업소 계약팀장 박상용 종합건설사업소 계약팀 주무관 이길재
○ 충남소방복합시설 건립공사 건축설계 공모	‘18.07.04.	자치행정국장 이정구 회계과장 임옥순 계약팀장 이헌희 계약팀 주무관 가한철
○ 충남소방복합시설 문화재 지표조사 용역 완료	‘18.07.13.	종합건설사업소장 박일수 종합건설사업소 계약팀장 박상용 종합건설사업소 계약팀 주무관 이길재
○ 충남소방복합시설 건립공사 건축설계공모 심사 및 당선작 통지	‘18.10.10.	종합건설사업소장 박일수 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 김태영
○ 충남소방복합시설 조성사업 변경계획	‘19.01.28.	충청남도지사 양승조 행정부지사 남궁영 문화체육부지사 나소열 소방본부장 윤순중 소방행정과장 김성찬 복합시설팀장 진종현
○ 지방재정투자사업 타당성조사 용역 계약체결	‘19.03.28.	소방본부장 윤순중 소방행정과장 김성찬 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근

<그간 주요 추진내용>
○ 문화재 시굴조사 용역(1차) 완료	‘19.09.11.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축1팀장 백상엽 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원
○ 문화재 정밀발굴조사 용역 완료(1차)	‘19.12.18.	종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축1팀장 백상엽 종합건설사업소 건축1팀 주무관 이기원
○ 충남소방복합시설 건립사업 수정계획 수립․결재	’19.12.30.	소방본부장 윤순중 소방행정과장 김경철 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근
○ 2020년 정기 제1차 지방재정 중앙투자심사 결과	’20.04.02.	예산담당관 구기선 지정지원팀장 김종수 지정지원팀 주무관 이초희
○ 2021년도 정기분 충청남도 공유재산 관리계획안 도의회 의결	’20.09.18.	세정과장 김성관 재산관리팀장 진성수 재산관리팀 주무관 최정희
○ 비행장개발사업(충청남도 소방복합시설 육상헬기장 설치공사)실시계획 승인	’21.01.15.	공항시설과장 이동호 공항시설 사무관 이재형
○ 2020년 제8회 충청남도 교통영향평가심의위원회 심의의결	’21.01.15.	교통정책과장 한상호 교통안전팀장 조용백 교통안전팀 주무관 고희주
○ 농업진흥지역 해제 승인	’21.03.18.	농업정책과장 김성균 농지관리팀장 심후석 농지관리팀 주무관 강환문
○ 충남소방복합시설 건립사업 기본 및 실시설계 용역 최종 보고회	’21.06.25.	소방본부장 조선호 소방행정과장 김경철 소방청사건축팀장 이학민 소방청사건축팀 주무관 배석제
○ 문화재 정밀발굴조사 준공	‘21.07.18.	종합건설사업소 공공건축과장 김재균 종합건설사업소 대형건축팀장 신태순 종합건설사업소 주무관 박성훈

<그간 주요 추진내용>
○ 조달청 공사계약 요청	’21.08.19.	종합건설사업소 공공건축과장 김재균 종합건설사업소 대형건축팀장 신태순 종합건설사업소 주무관 박성훈
○ 충남소방복합시설 건립사업 기본 및 실시설계 용역 준공	’21.08.26.	종합건설사업소 공공건축과장 김재균 종합건설사업소 대형건축팀장 신태순 종합건설사업소 주무관 박성훈
○ 조달청 건축공사 개찰	’21.10.20.	종합건설사업소 공공건축과장 김재균 종합건설사업소 대형건축팀장 신태순 종합건설사업소 주무관 박성훈
○ 문화재 유적공원 조성사업 설계용역 착수	’21.11.24.	종합건설사업소 공공건축과장 김재균 종합건설사업소 대형건축팀장 신태순 종합건설사업소 주무관 박성훈
○ 토목 및 건축공사 착공	’21.12.01.	종합건설사업소 공공건축과장 김재균 종합건설사업소 대형건축팀장 신태순 종합건설사업소 주무관 박성훈
○ 전기, 통신, 소방공사 착공	’21.12.15.	종합건설사업소 공공건축과장 김재균 종합건설사업소 대형건축팀장 신태순 종합건설사업소 주무관 박성훈
○ 충남소방복합시설 건립 기공식	’21.12.27.	소방본부장 조선호 소방행정과장 류일희 소방청사건축팀장 이학민 소방청사건축팀 주무관 배석제